붙임 1		용호천 생태하천 조성사업(Ⅰ지구) 사업설명

□ 사업개요

□ 사업구간 : 대덕구 장동 산133-8(산디마을) ~ 장동 217-1(탄약사령부)

□ 사업내용 : 재해예방 및 생태하천 조성 L=4.42㎞(하폭 13m→25m)

□ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년 / 사업시행 : 시

□ 총사업비 : 215억 원(국비 87억 원, 시비 128억 원)

(단위 : 억원)

재 원 별	총사업비	‘17년까지	‘18년도	‘19년도	‘20년도	‘21년이후	비 고
계	215	124	20	31	30	10
국 비	87	62	10	15	-	-	50→0%
시 비	128	62	10	16	30	10	50→100%

□ 추진현황

□‘13. 06. 04. ~‘14. 12. 17. : 실시설계 용역 / ㈜삼안,㈜선구

□‘15. 12. 11. : 하천공사시행계획수립 고시(제2015-204호)

□‘16. 05. ~‘17. 12.    : 1ㆍ2차 보상, 수용재결 및 공탁

□‘16. 05. 12. ~‘17. 04. 20. : 1차분 공사 준공

< L=0.68㎞(무명5교~장승교) / 공사비 1,277백만원(도급 877 / 관급 400) >

□‘17. 03. 02. ~‘18. 08. 10. : 2차분 공사 준공

< L=1.0km(샛뜸교~무명5교) / 공사비2,345백만원(도급1,825 / 관급520) >

□‘18. 07. 25. ~‘19. 12. 19. : 3차분 공사 준공

< L=2.3km(무명10교~샛뜸교) / 공사비5,211백만원(도급3,681 / 관급1,530) >

□‘20. 01. 20. ~‘20. 07. 17. : 4차분 공사 추진 중

< L=5.69km(전구간 제방도로) / 공사비 3,105백만원(도급2,479 / 관급626) >

□ 향후계획

□‘20. 03. ~ 06. : 전구간(양안) 제방도로 포장 L=5.69km

□‘20. 06. ~  : 추경예산 부족 사업비 확보(약 10억원)

※ 부족 사업비 사업내용 : 교량 2개소(장동교, 무명4교) 및 부대공