참고 1.	지방도 확충계획(남부)

(단위 : 백만원)

사 업 명		노선명	사업량 (㎞)	공사 기간	총사업비	연도별 투자계획
						기투자	2022년	향후
계	합 계(32개소)		127.44		1,954,909	886,614	80,501	987,794
	준 공( 5개소)		9.74		80,856	66,932	7,382	6,542
	공 사 중 (10개소)		43.14		991,658	739,988	46,879	204,791
	보 상 중 (7개소)		19.75		296,775	48,056	18,354	230,365
	설 계 중(10개소)		54.81		585,620	31,638	7,886	546,096
국지도(11개소)			63.87		1,123,541	545,248	42,924	535,369
1	초지대교～인천	국84호선	7.88	’15～’22	229,883	219,061	-	10,822
2	실촌～만선	국98호선	3.86	’18～’23	136,323	117,637	5,458	13,228
3	도척～실촌	국98호선	3.42	’19～’24	89,397	71,407	10,106	7,884
4	갈천～가수	국82호선	8.49	’19～’26	211,194	123,049	13,054	75,091
5	우정～향남	국82호선	7.20	설계중	100,734	3,835	4,334	92,565
6	양근대교	국98호선	1.0	착공예정	48,858	1,006	6,920	40,932
7	건업～상품	국98호선	4.20	설계중	60,101	4,351	1,834	53,916
8	광주~양평	국88호선	10.4	설계중	93,441	1,988	406	91,047
9	장지~남사	국82호선	6.9	설계중	48,474	1,422	406	46,646
10	강하~강상	국88호선	6.4	설계중	55,344	1,492	406	53,446
11	성환~입장	국70호선	4.12	설계중	49,792	-	-	49,792
지방도(13개소)			53.41		747,292	285,102	22,405	439,785
1	불현～신장	지325호선	6.43	‘17～’22	61,000	49,458	5,000	6,542
2	이화～삼계(2)	지302호선	6.27	‘20～’25	119,635	79,754	3,205	36,676
3	진위역～오산시계 (동서축1)	지314호선	2.10	‘20～’22	37,783	31,020	-	6,763
4	공도～양성(1)	지321호선	3.30	‘20～’23	44,964	28,090	5,000	11,874
5	매산～일산	지321호선	2.32	‘20～’24	52,335	27,770	3,000	21,565
6	천송～신남	지345호선	2.48	‘21～’24	28,944	12,760	-	16,184
7	고삼～삼죽(1)	지306호선	3.02	착공예정	33,400	9,380	1,800	22,220
8	덕평～매곡	지325호선	3.30	보상중	61,904	18,270	1,500	42,134
9	일죽～대포(2)	지329호선	8.60	보상중	129,593	10,050	2,400	117,143
10	문호～도장	지352호선	2.90	설계중	33,842	450	-	33,392
11	안중～조암(2)	지313호선	5.52	설계중	93,100	15,200	-	77,900
12	자안～분천(2)	지322호선	2.50	설계중	18,100	2,900	-	15,200
13	무갑~광동	지325호선	4.67	설계예정	32,692	-	500	32,192
선형개량(8개소)			10.16		84,076	56,264	15,172	12,640
1	야밀고개(양평)	지306호선	3.02	‘18～’23	41,200	29,440	7,056	4,704
2	동신리(안성)	지302호선	1.28	‘20～’22	7,882	7,300	582	-
3	서원리(여주)	국88호선	0.58	‘20～’22	3,708	2,708	1,000	-
4	수입리(양평)	국86호선	0.16	‘20～’22	2,766	2,766	-	-
5	성은리(안성)	국23호선	1.29	‘20～’22	5,500	4,700	800	-
6	정수리(용인)	국98호선	1.13	착공예정	9,820	6,200	2,300	1,320
7	교평~세월(양평)	국88호선	2.2	보상중	10,000	2,000	1,384	6,616
8	흑석고개(여주)	국84호선	0.5	보상중	3,200	1,150	2,050	-

참고 2.	지방도 확충계획(북부)

(단위 : 백만원)

사 업 명		노선명	사업량 (㎞)	공사 기간	총사업비	연도별 투자계획
						기투자	2022년	향후
계	합 계(19개소)		80.85		1,445,186	597,591	71,579	776,016
	준 공 ( 2개소)		4.7		51,262	37,645	4,800	8,817
	공 사 중 ( 8개소)		41.02		763,321	442,106	55,939	265,276
	보 상 중 ( 2개소)		7.04		184,392	68,000	4,840	111,552
	설 계 중 ( 7개소)		28.09		446,211	49,840	6,000	390,371
국지도(5개소)			29.93		570,215	329,751	48,039	192,425
1	오남~수동	국98호선	8.13	’17~’23	216,814	159,723	28,644	28,447
2	가납~상수	국39호선	5.70	’16~’23	99,504	85,843	4,596	9,065
3	와부~화도	국86호선	4.30	’20~’23	71,676	52,368	3,179	16,129
4	장흥~광적	국39호선	6.30	’20~’25	80,230	26,400	6,123	47,707
5	군내~내촌	국56호선	5.50	’21~’28	101,991	5,417	5,497	91,077
지방도(13개소)			48.4		859,328	261,840	18,700	578,788
1	적성~두일	지371호선	6.34	’18˜’23	104,449	78,590	5,000	20,859
2	문산~내포(1)	지359호선	0.82	’19˜’22	21,342	14,945	3,000	3,397
3	은현~봉암	지375호선	3.88	’20˜’22	29,920	22,700	1,800	5,420
4	문산~내포(2)	지359호선	1.16	’21˜’23	14,467	5,965	500	8,002
5	하송우~마산	지360호선	3.59	’21˜’28	74,190	27,800	2,400	43,990
6	화도~운수	지387호선	4.52	보상중	168,749	62,000	-	106,749
7	월롱~광탄(1)	지360호선	4.60	설계중	106,463	9,400	-	97,063
8	효촌~신산	지364호선	5.08	설계중	44,049	4,000	2,000	38,049
9	진건~오남	지383호선	4.95	설계중	104,601	11,120	-	93,481
10	신평~심곡	지368호선	2.86	설계중	41,879	5,320	3,000	33,559
11	갈현~축현	지359호선	5.10	설계중	54,716	20,000	-	34,716
12	내방~연하	지387호선	2.60	설계예정	48,132	-	500	47,632
13	덕둔~계류	지386호선	2.90	설계예정	46,371	-	500	45,871
선형개량(1개소)			2.52		15,643	6,000	4,840	4,803
1	고문리(연천)	국78호선	2.52	착공예정	15,643	6,000	4,840	4,803